Постановление Правительства РС(Я) от 25.02.2021 N 34
(ред. от 28.12.2023)
"Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.06.2024

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2021 г. N 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ЗАДАНИЙ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)		

В целях своевременного обеспечения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, обеспечения участия учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия), в осуществлении экспертной оценки проекта задания на проектирование по объектам капитального строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется (планируется осуществить) за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет.
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Министерству строительства Республики Саха (Якутия) до 15 марта 2021 года утвердить типовую форму задания на проектирование объекта капитального строительства и требования к его подготовке.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2011 г. N 598 "О Порядке согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия)";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2012 г. N 594 "О внесении изменений в Порядок согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2011 г. N 598";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2015 г. N 59 "О внесении изменений в Порядок согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2011 г. N 598";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2018 г. N 218 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2011 г. N 598 "О Порядке согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия)";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2019 г. N 318 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2011 г. N 598 "О Порядке согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия)".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Садовникова Д.Д.
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А.ТАРАСЕНКО

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 февраля 2021 г. N 34

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)		

1. Настоящий Порядок согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регулирует процедуру согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях своевременного обеспечения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, определения экономически обоснованной сметной стоимости строительства (реконструкции) и проектирования объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Понятия, используемые в настоящем порядке:
задание на проектирование - перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком в документальном виде и выданных исполнителю работ проектно-исследовательского характера для ориентирования на создание проекта, удовлетворяющего желаниям заказчика и соответствующего условиям использования, применения разрабатываемого проекта, а также ресурсным ограничениям;
заказчик - юридическое лицо, обеспечивающее на основе государственного контракта (договора подряда) строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства (реконструкции);
предполагаемая (предельная) стоимость строительства (реконструкции) объекта - стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство;
государственный заказчик:
а) по объектам гражданского назначения:
жилья по государственной программе Республики Саха (Якутия) обеспечения качественным жильем - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по реализации государственной политики в Республике Саха (Якутия) в области жилищного строительства;
жилья, объектов комплексной компактной застройки и объектов социального назначения по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по выработке и реализации государственной аграрной политики Республики Саха (Якутия);
здравоохранения - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный за реализацию государственной политики и осуществляющий управление в области охраны здоровья населения;
культуры - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный за реализацию государственной политики в сфере культуры;
инноваций, связи и инновационных технологий - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативному правовому регулированию и управлению в сфере инноваций, цифрового развития и массовой информации;
образования и науки - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), обеспечивающий реализацию государственных полномочий Республики Саха (Якутия) в сфере общего и дополнительного образования, профессионального образования, государственной научно-технической политики в Республике Саха (Якутия);
туризма и бизнеса - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, индустрии туризма;
спорта - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта;
социального обслуживания - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий реализацию государственной политики и функции в сфере труда и социальной защиты;
б) по объектам производственного назначения:
коммунального хозяйства и энергетики - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий проведение единой государственной политики Республики Саха (Якутия) в области жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетического комплекса и энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по выработке и реализации государственной аграрной политики Республики Саха (Якутия);
промышленности и газоснабжения - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий выработку и реализацию государственной политики, нормативное правовое регулирование и управление в сфере промышленности;
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий разработку и реализацию государственной власти в сфере гражданской авиации, морского, речного, железнодорожного и автомобильного видов транспорта, дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
экологии и природопользования - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный по нормативно-правовому регулированию и управлению, организации и осуществлению программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
защитные сооружения гражданской обороны (укрытие, убежище и т.п.) - исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий организацию и координацию мероприятий в области защиты населения и территорий Республики Саха (Якутия) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В отношении многофункциональных объектов, сочетающих в себе помещения двух или более эксплуатационных назначений, государственным заказчиком выступают отраслевые исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) по отраслевой принадлежности в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта.
3. Задание на проектирование подготавливается с исходными данными, достаточными для разработки проектной документации объекта капитального строительства в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, в соответствии с типовой формой задания на проектирование объекта капитального строительства, утверждаемой приказом Министерства строительства Республики Саха (Якутия), состоящей из 3 разделов:
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)
1) общие данные - основание для проектирования объекта, основные технико-экономические показатели, источники финансирования строительства, предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, сроки строительства, перечень основного технологического оборудования;
2) требования к проектным решениям - требования к архитектурно-художественным, технологическим, конструктивным и объемно-планировочным решениям, порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, требования к строительным конструкциям, мероприятиям по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) иные требования к проектированию - требования к составу проектной документации, подготовке сметной документации, разработке специальных технических условий, о применении технологий информационного моделирования и экономически эффективной проектной документации повторного использования.
Основанием для подготовки задания на проектирование объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется полностью или частично за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), является наличие объекта капитального строительства в соответствующих государственных программах Республики Саха (Якутия), принятие решения Главы Республики Саха (Якутия) и/или Правительства Республики Саха (Якутия) о проектировании и строительстве (реконструкции) объекта.
4. Задание на проектирование может быть подготовлено в электронной форме и утверждено с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При наличии в документах сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, документы и проект задания на проектирование представляются на бумажном и (или) электронном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5. В случае подготовки задания на проектирование на бумажном носителе подготовка осуществляется в 3 (трех) экземплярах (для государственного заказчика, заказчика и проектировщика).
6. Проект задания на проектирование (общие данные) подготавливается государственным заказчиком с даты утверждения перечня объектов капитального строительства, подлежащих проектированию, срок которого не должен превышать 10 рабочих дней.
Подготовленный государственным заказчиком проект задания на проектирование (общие данные) представляется на согласование в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по разработке и координации реализации государственной экономической политики Республики Саха (Якутия), по государственному регулированию инвестиционной деятельности, реализации государственной политики в сфере государственно-частного партнерства, кластерной политики, по подготовке и заключению концессионных соглашений, с приложением обоснования предлагаемой мощности объекта. Срок согласования не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения проект задания на проектирование считается согласованным.
7. Согласованный с исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим функции по разработке и координации реализации государственной экономической политики Республики Саха (Якутия), по государственному регулированию инвестиционной деятельности, реализации государственной политики в сфере государственно-частного партнерства, кластерной политики, по подготовке и заключению концессионных соглашений, проект задания на проектирование передается заказчику в течение 1 рабочего дня для подготовки требований к проектным решениям и иных требований. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения согласованного задания на проектирование направляет запросы организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на получение технических условий и исходно-разрешительной документации.
После получения технических условий и исходно-разрешительной документации заказчик подготавливает проект задания на проектирование в части требований к проектным решениям и иным требованиям, срок которого не должен превышать 10 рабочих дней, при условии необходимости получения дополнительных технических условий - 20 рабочих дней.
8. Утратил силу. - Постановление Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650.
9. Проект задания на проектирование, за исключением проекта задания на проектирование особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального строительства, согласованный в соответствии с пунктами 6 - 7 настоящего Порядка, направляется заказчиком на рассмотрение для целей согласования в учреждение, уполномоченное Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, с заявлением в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. N 313/пр "Об утверждении Методических рекомендаций о проектах заданий на архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)
10. При рассмотрении проекта задания на проектирование учреждением, уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - экспертная организация), проводится оценка:
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)
оптимальности и достаточности основных (принципиальных) архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений в целях возможности их реализации при подготовке проектной документации объекта капитального строительства с учетом необходимости соблюдения требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта, а также с учетом результатов инженерных изысканий;
обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства (реконструкции);
обоснования метода определения сметной стоимости строительства (реконструкции);
достаточности исходных данных, предусмотренных проектом задания на проектирование, для разработки проектной документации объекта капитального строительства;
наличия перечней нормативно-технических документов, которыми предполагается руководствоваться при разработке проектной документации;
оптимальности сроков и этапов строительства объекта капитального строительства;
правильности выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает использование такой проектной документации), или обоснованность решения о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования.
11. По результатам рассмотрения проекта задания на проектирование могут быть сделаны выводы по результатам проведенной экспертной оценки, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, а также о возможности согласования (несогласования) проекта задания на проектирование, направляемые письмом экспертной организации в адрес заявителя.
12. Письмо, указанное в пункте 11 настоящего порядка, направляется в электронной форме в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления на рассмотрение проекта задания на проектирование. Подготовка и направление письма могут быть осуществлены на бумажном носителе (на руки заявителю или путем направления заказного письма, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о государственной тайне).
13. В случае наличия замечаний при согласовании в соответствии с пунктами 9 - 12 настоящего порядка проект задания на проектирование дорабатывается заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего заключения и оформлением реестра учета замечаний в соответствии с приложением к настоящему порядку. В случае отказа принятия замечаний проект задания на проектирование в течение 2 рабочих дней повторно направляется на согласование в орган, внесший замечания, с обоснованием в отказе. Срок повторного согласования не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления, в случае нарушения регламентных сроков рассмотрения проект задания на проектирование считается согласованным.
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)
14. Подготовленный и согласованный проект задания на проектирование представляется заказчиком в течение одного рабочего дня после дня получения согласований в соответствии с пунктами 6 - 7, 9 - 13 настоящего порядка на утверждение:
по объектам гражданского назначения в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной деятельности;
по объектам производственного назначения, в том числе линейных объектов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего порядка.
Срок согласования проекта задания на проектирование не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления проекта задания на проектирование. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения проект задания на проектирование считается согласованным.
Внесению на утверждение подлежат проекты заданий на проектирование объектов, строительство которых предусмотрено градостроительной документацией (генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, правилами землепользования и застройки, размещенными в региональной геоинформационной системе территориального планирования Республики Саха (Якутия), проектом планировки территории, проектом межевания территории.
(п. 14 в ред. постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)
15. Срок утверждения заданий на проектирование не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления.
16. При определении основных требований к проекту в части архитектурно-планировочных решений, наружной и внутренней отделки, конструктивных решений и материалов несущих и ограждающих конструкций, к инженерному и технологическому оборудованию государственный заказчик и заказчик должны опираться на современные передовые технологии с учетом единой технической политики, сложившейся в регионе.
Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, строительство которого обеспечивается исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Республикой Саха (Якутия), муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Республики Саха (Якутия), муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, осуществляется с обязательным использованием соответствующей установленным Правительством Российской Федерации критериям экономической эффективности проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, при наличии такой проектной документации повторного использования.
Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта, при отсутствии экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, осуществляется при условии соблюдения установленных Правительством Российской Федерации критериев экономической эффективности проектной документации.

Приложение
к порядку согласования заданий
на проектирование объектов
капитального строительства,
строительство (реконструкция)
которых осуществляется
за счет средств бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

ФОРМА

РЕЕСТР
УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ ЗАДАНИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА "__________________"

N
п/п	Редакция по проекту	Орган, внесший замечания	Замечания и предложения по проекту	Учтено/ не учтено	Проект с учетом замечания	

Руководитель (заместитель руководителя) Заказчика	_____________________/
Подпись	__________________________
Ф.И.О.	

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 февраля 2021 г. N 34

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

		Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства РС(Я) от 28.12.2023 N 650)		

1. Настоящий порядок внесения изменений в задание на проектирование объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, регулирует процедуру внесения изменений к заданию на проектирование объектов капитального строительства после его утверждения.
2. Изменения в задание на проектирование объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вносится на основании:
1) протокола технического совета заказчика, с приложением обоснования государственного заказчика;
2) по замечаниям учреждения, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия), на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
3. Изменение в задание на проектирование может быть подготовлено в электронной форме и утверждено с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При наличии в документах сведений, доступ к которым органичен в соответствии с законодательством Российской Федерации, документы и изменение к заданию на проектирование представляются на бумажном и (или) электронном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4. В случае подготовки изменений к заданию на проектирование на бумажном носителе подготовка осуществляется в трех экземплярах (для государственного заказчика, заказчика и проектировщика (физического или юридического лица, соответствующего требованиям, предъявляемым к подрядчикам, которое осуществляет подготовку проектной и рабочей документации по договору подряда).
5. В случае, если изменения касаются основных требований к помещениям объекта, требований к оснащению оборудованием объекта, а также требований, касающихся заполнения государственным заказчиком, пункта 1 приложения N 2 формы задания на проектирование, согласно приказу Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2021 г. N 71 "Об утверждении типовой формы задания на проектирование объектов капитального строительства и требований к его подготовке", данное изменение в задание на проектирование вносится государственным заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения замечаний от заказчика и учреждения, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
В случае, если заключен государственный контракт на проектно-изыскательские работы, или на строительно-монтажные работы объекта капитального строительства, изменения, вносимые в задание на проектирование, подготовленное государственным заказчиком, представляются на согласование заказчику с обоснованием внесения изменений в течение одного рабочего дня со дня подготовки данных изменений. Срок рассмотрения заказчиком изменений к заданию на проектирование не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления.
Государственным заказчиком изменения в задание на проектирование представляется на утверждение в течение одного рабочего дня с момента его подготовки:
по объектам гражданского назначения в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной деятельности;
по объектам производственного назначения, в том числе линейных объектов в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), указанные в подпункте "б" пункта 2 порядка согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция), которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Срок утверждения не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения изменения к заданию на проектирование считается утвержденным.
6. В случае, если изменения касаются расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта, данные изменения в задание на проектирование вносятся государственным заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения замечаний от учреждения, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия), на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, и заказчика.
Подготовленные государственным заказчиком изменения в задание на проектирование в части расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта представляется в течение одного рабочего дня с момента их подготовки на согласование в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий функции по разработке и координации реализации государственной экономической политики Республики Саха (Якутия), по государственному регулированию инвестиционной деятельности, реализации государственной политики в сфере государственного-частного партнерства, кластерной политики, по подготовке и заключению концессионных соглашений, с приложением обоснования внесения изменений в расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта.
Срок согласования не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения, изменения в задание на проектирование считаются согласованными.
Согласованные с исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим функции по разработке и координации реализации государственной экономической политики Республики Саха (Якутия), по государственному регулированию инвестиционной деятельности, реализации государственной политики в сфере государственного-частного партнерства, кластерной политики, по подготовке и заключению концессионных соглашений, изменения к заданию на проектирование представляются в течение одного рабочего дня их согласования на утверждение:
по объектам гражданского назначения в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной деятельности;
по объектам производственного назначения, в том числе линейных объектов, в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), указанные в подпункте "б" пункта 2 порядка согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Срок утверждения не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения изменений, вносимых в задание на проектирование, данные изменения считаются утвержденными.
7. В случае, если изменения вносятся в части требований к проектным решениям и иным требованиям к заданиям на проектирование, данные изменения направляются заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения замечаний от учреждения, уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, и заказчика.
Подготовленные заказчиком изменения к заданию на проектирование представляются в течение одного рабочего дня на утверждение:
по объектам гражданского назначения в исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в области архитектуры и градостроительной деятельности;
по объектам производственного назначения, в том числе линейных объектов, в исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), указанные в подпункте "б" пункта 2 порядка согласования заданий на проектирование объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Срок утверждения не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления. В случае нарушения регламентных сроков рассмотрения изменения к заданию на проектирование считаются утвержденными.
8. В случае отказа утверждения изменений, вносимых в задание на проектирование, исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) подготавливается и приобщается соответствующее обоснование.
9. Требования, установленные настоящим порядком, не распространяются на случаи внесения изменений к заданию на проектирование, которое утверждено до вступления в силу настоящего порядка (порядок согласования и утверждения, а также форма задания на проектирование и изменения к нему остаются прежними).